UMOWA CRU …………………………………….
zawarta w dniu ......................... w Zielonej Górze pomiędzy:
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań
REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000269806
Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 zł
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Góra

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1.	…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 	
a
..........
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1.	................................................................................................................	
§ 1	
1.	Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania:
Przebudowa sieci SN i nn w m. Karpicko
2.	Wykonawca wykona robotę budowlaną zgodnie z treścią złożonej oferty i Warunkami Zamówienia z dnia: 19.11.2015 – w zakresie nieokreślonym ofertą.
3.	Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
Stacja transformatorowa
Stacja kompaktowa z transformatorem 250 kVA o przekładni 15,75/0,42 kV (transformator - zakup ENEA) z rozdzielnią SN w izolacji SF6 w układzie TLL oraz rozdzielnią nn 0,4 kV dwunastopolową (wyposażone 7 pól) w obudowie betonowej z obsługą z zewnątrz. Stacja usytuowana na działce nr 52/1.
Linie kablowe SN 15 kV
a)	linia kablowa SN 15 kV 3×1×120 mm2 L=670 m, relacji: stacja transformatorowa nr S-1518 Wolsztyn „Parkowa” - proj. stacja transformatorowa,
b)	linia kablowa SN 15 kV k-k S-1182 Karpicko "Drzymały" - przełożenie kabla (zdjęcie z istn. stacji słupowe) 3xYHAKXS 1x70 mm2 L=10 m do proj. stacji.
Linie kablowe nn 0,4 kV
-	przełożenie istniejących linii (obwodów) z istn. stacji słupowej S-1178 Karpicko "Jeziorna" do proj. stacji  4×YAKY 4×120 mm2 4×L=10 m.
Przyłącza kablowe nn 0,4 kV
Przyłącze kablowe szt. 1 do restauracji "Leśna" - montaż złącza kablowego ZK1x-1P nr 187/5/1 i ułożenie kabla 4×120 mm2 L=120 m.
Pozostałe elementy sieci
Demontaż istniejącej stacji transformatorowej słupowej nr S-1178 Karpicko "Jeziorna",
wraz z kosztami towarzyszącymi:
-	ukształtowania i zagospodarowania terenu pod stację transformatorową,
-	pomiarów pomontażowych,
-	zajęcia pasa drogowego,
-	obsługi geodezyjnej,
-	odszkodowań dla osób trzecich,
-	załadunku i transportu urządzeń będących dostawą inwestorską,
-	zwózki i utylizacji materiałów z demontażu.
4.	Przy wykonaniu roboty budowlanej Wykonawca użyje następujące urządzenia, które są przedmiotem dostawy inwestorskiej:
Transformator: moc 250 kVA szt. 1; za odbiór i transport transformatora na plac budowy odpowiada Wykonawca. O terminie odbioru transformatora Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.
5.	Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia wszelkich niezbędnych umów o ubezpieczenia majątkowe – w wysokości odpowiadającej majątkowi zgromadzonemu na placu budowy – na okres wykonywania roboty budowlanej.
6.	Wykonawca oświadcza, że w zakresie wykonywania robót budowlanych posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, ważną do dnia: ……………….r z limitem odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń na kwotę ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………….).
7.	Wykonawca powinien na każde żądanie Zamawiającego przedstawić kopię stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenie terminowego wpłacania składek.
§ 2
1.	Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie realizacji określonej części bądź całości zamówienia podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę. Jednakże, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zgody udzielił. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, udzielona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ustępie.
2.	Zapisy ust. 1 nie wyłączają powierzenia wykonania części robót podwykonawcom w zakresie określonym w Warunkach Zamówienia i ofercie Wykonawcy.	
3.	Umowy, o których mowa w ust. 1 powinny zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.
4.	Wykonanie umowy przez podwykonawcę zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w obecności Zamawiającego i przez niego zaakceptowanym w formie pisemnej.
5.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim.
6.	Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzył - w całości lub części - podwykonawcy, będzie uzależniona od udokumentowania przez Wykonawcę faktu uregulowania przez niego całego wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu wykonania rozliczanej części. W przypadku przekazania faktury bez ww. udokumentowania termin płatności ulega zawieszeniu do czasu przedstawienia stosownych dokumentów.
7.	Wykonanie całości lub części zamówienia nie może być w żadnym przypadku powierzone podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy będącemu jednocześnie pracownikiem Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę a przy wykonywaniu powierzonej mu części zamówienia podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie występował jako przedsiębiorca prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.
§ 3
1.	Wykonawca wykona roboty budowlane w technologii uzgodnionej z Zamawiającym, na podstawie:
a)	dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej przez Biuro Techniczne „INSTEL-PROJEKT” sp.j. J. Bieliński, J. Wirszyc, ul. Trasa Północna 19, 65- 110 Zielona Góra.
b)	oferty złożonej w postępowaniu przez Wykonawcę,
c)	umów zawartych przez Zamawiającego dla realizacji przedmiotowego zadania,
d)	warunków zabudowy terenu i pozwolenia na budowę,
e)	warunków technicznych i prawa budowlanego,
f)	obowiązujących norm i aprobat technicznych,
g)	zasad rzetelnej wiedzy technicznej,
h)	używając materiałów, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.
§ 4
1.	Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji robót budowlanych:
a)	przekazanie placu budowy nastąpi w terminie: do 14 dni od daty zawarcia umowy,
b)	zakończenie roboty budowlanej nastąpi w terminie: 29.04.2016, z zastrzeżeniem ust c). 
Za dzień dokonania odbioru końcowego Inwestycji uznaje się dzień podpisania przez członków Komisji Odbioru Technicznego protokołu tego odbioru w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Za dzień zakończenia realizacji Inwestycji uważany jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego Inwestycji.
c)	w razie przeszkód w rozpoczęciu lub wykonaniu roboty budowlanej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak np. sytuacja ruchowa u Zamawiającego, wyłączenia czy awarie, brak zgody wejścia na grunty, termin umowy może ulec przesunięciu o okres zaistniałej zwłoki. Zaistnienie takich okoliczności musi zostać potwierdzone protokolarnie,
d)	po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
e)	Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, przestrzegać przepisów BHP, ppoż. oraz szczegółowych instrukcji Zamawiającego, które są zgodne z przepisami dotyczącymi prac objętych niniejszą umową, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
f)	Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji umowy.
§ 5
1.	Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
kwota netto:	… zł	
kwota netto słownie:	… złotych	
- zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przez Wykonawcę.
2.	Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.	Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: ………………………. a faktury dokumentujące sprzedaż zostaną zaewidencjonowane w rejestrze sprzedaży dla potrzeb podatku VAT i zostaną ujęte w deklaracji VAT za miesiąc, w którym zostały wystawione.
4.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP: 782-23-77-160.
§ 6 
1.	Rozliczenie nastąpi na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego, po pozytywnym komisyjnym odbiorze roboty budowlanej, na który składają się:
a)	przekazane przez Wykonawcę protokoły badań, pomiarów, atestów oraz innych dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu budowy,
b)	odbiór dokonywany przez Zamawiającego.
2.	Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru, załączając wszystkie niezbędne dokumenty (dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów, atesty, protokoły odbioru terenów, zgłoszenie o zakończeniu roboty budowlanej, dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjną, itp.) oraz oświadczenie kierownika budowy o poprawności zrealizowanych robót. Druki zgłoszenia oraz oświadczenia są dostępne u przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 10.
3.	Czynności związane z odbiorem przeprowadzone zostaną nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o którym mowa w ust. 2. i zakończone protokołem odbioru technicznego, lub notatką służbową w przypadku negatywnego odbioru.
4.	Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce za spełnienie zobowiązania wynikającego z umowy tj. terminu zakończenia roboty, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
5.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
6.	Za prawidłowo wystawioną fakturę strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zawierający następujące informacje:
a)	numer umowy,
b)	nr zamówienia …………………………………………..,
c)	imię i nazwisko zleceniodawcy - ……………………………………………,
d)	nazwa komórki organizacyjnej- OD4/ZIR-RI,
e)	oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
7.	Faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na następujący adres:
ENEA Operator Sp. z o.o.
Centrum Zarządzania Dokumentami
ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Góra
8.	Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9.	Za przekroczenie terminu płatności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.
10.	Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszty instytucji go kredytujących i transferujących środki płatnicze na jego zlecenie w związku z realizacją niniejszej umowy.
11.	Przeniesienie wierzytelności (cesja) możliwe będzie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 7
1.	Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w następujących sytuacjach i w następującej wysokości:
a)	Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu roboty budowlanej lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie gwarancji (licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad) w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust 1,
b)	Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust 1,
c)	Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto określonego w §5 ust 1,
d)	każde naruszenie obowiązków określonych w  §2 ust. 7 dotyczących podwykonawstwa świadczonego przez pracowników Zamawiającego w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia netto określonego w §5 ust 1.
2.	W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy lub osoby za którą ponosi on odpowiedzialność przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8
1.	Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
a)	rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
b)	zajęcia majątku Wykonawcy,
c)	zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 7 dni,
d)	wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją,
e)	zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcę przez okres przekraczający 7 dni,
f)	zwłoki w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcę przekraczającej 14 dni,
g)	rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonania roboty budowlanej niezgodnie z Warunkami Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2.	Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują kary umowne, o których mowa w §7 pkt 1 ppkt c).
3.	Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego Zamawiającego.
4.	Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.	W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła, Wykonawca:
a)	wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla zabezpieczenia już zrealizowanych prac,
b)	uwzględniając postanowienia ust 7 – usunie sprzęt budowlano montażowy i wycofa swój personel 
z terenu budowy oraz uporządkuje teren budowy,
c)	przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień odstąpienia,
d)	dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia.
6.	W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na to, która Strona od umowy odstąpiła, Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a)	wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
b)	poniesione przez Wykonawcę uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust 5 a).
7.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wejść na teren budowy i zakończyć realizację we własnym zakresie lub zatrudniając osobę trzecią.
8.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację umowy, ustali koszt zakończenia roboty budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy powiększone o koszt robót zrealizowanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią przekraczają wynagrodzenie określone w §5, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę różnicę.
§ 9
1.	Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji biegnącej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru roboty budowlanej.
2.	W okresie trwania gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach obiektu budowlanego będącego przedmiotem roboty budowlanej w terminie 3 dni od daty wykrycia wady. Wykonawca w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przystąpi do usunięcia wad, które usunie w ciągu 24 godzin, lub uzgodni z Zamawiającym, w formie pisemnej, inny termin ich usunięcia.
3.	W okresie trwania gwarancji, gdy wada obiektu budowlanego będącego przedmiotem roboty budowlanej zagraża przerwą w dostawie energii do odbiorców lub bezpieczeństwu ludzi i mienia, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przystąpienia do usunięcia wady lub w uzgodnieniu z Zamawiającym pokryje koszty naprawy wykonanej przez innego wykonawcę.
§ 10
1.	Obowiązki przedstawiciela ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
Pan Aleksander Rudnicki, tel.: 68 3281884.
2.	Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie:
Pan(i) ........................, tel.: ........................., uprawnienia budowlane nr ...........................
3.	Obowiązki osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za odbiór urządzeń będących dostawą     
Zamawiającego pełnić będzie:
Pan(i)……………………….., nr dowodu osobistego…………………………………

§ 11
1.	Wykonawca ma obowiązek: 
a)	wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostępnionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. (według wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celów realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim ani niepublikowania w jakiejkolwiek formie w całości lub części,
b)	odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz zniszczyć lub zwrócić natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (tj. również trwale usunąć z systemów informatycznych), informacje sensytywne uzyskane od ENEA Operator Sp. z o.o.
§ 12
1.	Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2.	W przypadku gdyby rozwiązania polubownego nie dało się wypracować, strony poddadzą spory pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu w Zielonej Górze.
3.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności i mogą być dokonane wyłącznie gdy są korzystne dla Zamawiającego, bądź gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4. Wykonawca przedstawi projekt aneksu z uzasadnieniem proponowanych zmian nie później niż 14 dni przed terminem wskazanym w §4 ust. 1 pkt b).
4.	Zmiany adresu Stron, numeru konta bankowego, wykazu osób do kontaktu nie stanowią zmiany umowy i nie wymagają zawierania dodatkowych aneksów. O powyższych zmianach strony powiadamiają się wzajemnie w formie pisemnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
5.	Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami).
6.	Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:
1.	Wykaz sensytywnych informacji handlowych
2.	Wymagania dotyczące pozyskania współrzędnych obiektów energetycznych

Zamawiający		Wykonawca	

Pieczęć imienna i podpis		
Pieczęć imienna i podpis	

Załącznik nr 1
Wykaz sensytywnych informacji handlowych
Za informacje sensytywne uznaje się informacje o Użytkownikach Systemu lub Potencjalnych Użytkownikach Systemu dotyczące:
•	wielkości mocy umownej,
•	danych odczytowych urządzeń po
•	miarowych mocy i energii elektrycznej,
•	zużycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,
•	umownych ograniczeń występujących w dostarczaniu energii elektrycznej,
•	terminów płatności faktur i okresów rozliczeniowych,
•	zadłużenia i windykacji należności,
•	historii płatności,
•	indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przyłączenia do sieci z wyłączeniem informacji określonych w art. 7 ust. 8l ustawy Prawo energetyczne,
•	ekspertyzy wpływu przyłączania do sieci elektroenergetycznej urządzeń, instalacji lub sieci wytwórczych i odbiorczych na System.

Załącznik nr 2
Przekazywanie współrzędnych (x,y) obiektów energetycznych w wersji elektronicznej jako załącznika do dokumentacji powykonawczej.
Plik tekstowy „txt” ze współrzędnymi obiektów energetycznych  powinien mieć strukturę:
Opis (numer punktu którego współrzędne opisujemy),Y, X
np.: 
1eNN,5988061.10,3334768.45
2eNN,5988065.52,3334766.21
3eS,5988070.90,3334766.90
4eS,5988093.44,3334769.91
Między opisem/numerem i współrzędnymi ma znajdować się tylko znak przecinka, zaś każdy punkt współrzędnych ma być oddzielony od następnego i poprzedniego tylko znakiem „enter”. Części dziesiętne powinny być podawane po kropce. 
Opis/numer powinien identyfikować kolejność współrzędnej oraz typ kabla. Numeracja winna być zgodna z numeracją punktów na szkicu czy mapie załączonej do dokumentacji. Pomiar współrzędnych geodezyjnych należy wykonać w szczególności dla punktów: załamań linii, posadowienia słupów, stacji transformatorowych, złącz i węzłów kablowych, działek pod stacjami transformatorami itp.
Współrzędne geodezyjne można przekazać w następujących polskich układach współrzędnych (obecnie obsługiwanych przez system Facilplus Spatial):
- PL1965/2
- PL1965/3
- PL1965/4
- PL1992
- PL2000/7
- WGS84